7	교육발전특구 사업(해봄센터 구축)

◇ 위    치: 동문동 233-4

◇ 기    간: 2024. 2. ~ 2026. 3.

◇ 사 업 비: 35억 원 (특조 6 시 29)

◇ 사 업 량: 1,114.92㎡ (리모델링)

◇ 사업내용: 교육발전특구센터, AI□디지털체험실, 가칭다함께돌봄 해봄센터 등

2025 목표	해봄센터 개소

□ 업무추진 로드맵

해봄센터 준공 (2025. 10.)	▸	다함께돌봄센터 설치등록 (2025. 11.)	▸

AI□디지털 체험실 조성 용역 발주 (2025. 11.)	▸	AI□디지털 체험실 조성 완료 (2026. 3.)

주간 업무계획	·해봄센터 센터장 결격사유 조회 ·해봄센터 가구 및 집기 구입

□ 그동안 추진 및 진행 상황 (✔ 현재 추진 중)

◦ 2024. 2.: 교육발전특구 시범지역 공모사업 선정

◦ 2024. 8.: 2024~2026 서산시 교육발전특구 사업 종합 추진계획 수립

◦ 2024. 11. ~ 2025. 2.: 해봄센터구축사업 건축기획 용역 실시

◦ 2025. 2.: 리모델링 공공건축심의회 의결

◦ 2025. 3.: 리모델링 실시설계 용역 완료

◦ 2025. 4.: 구축사업 투시도 제작 용역 완료

◦ 2025. 5.: 민간위탁 원가산정 용역 완료

◦ 2025. 6.: 일상감사 및 계약심사 완료 및 민간위탁 모집공고

◦ 2025. 7.: 해봄센터 구축사업 착수

◦ 2025. 8.: 수탁기관 선정 및 위수탁 협약체결

(특구센터)한서대학교, (해봄센터)서산시복지재단

◦ 2025. 9.: 다함께돌봄해봄센터 직원 채용공고

◦ 2025. 9.: 해봄센터 센터장, 행정원 채용

◦ 2025. 10.: 센터 가구 발주 및 CCTV 설치 행정예고

◦ 2025. 11. 4.: 해봄센터 개소식 개최

◦ 2025. 11.: 다함께돌봄 사회복지시설 등록 ✔

□ 재원별 투자계획

(단위 : 억원)

재 원	총사업비	기투자	2025년	2026년 요구	2027년
계	180	60	60	40
국 비	90	30	30	20
도 비
시 비	90	30	30	20

□ 향후 추진계획

◦ 2025.10.: AI□디지털 체험실 조성 용역 발주

◦ 2026. 3.: 해봄센터 내 AI□디지털 체험실 조성 완료

【조 감 도】

평생교육과장 성기영 (☏2360), 교육협력팀장 이하숙 (☏3379), 담당자 손소연 (☏2690)

평생교육과장 성기영 (☏2360), 교육협력팀장 이하숙 (☏3379), 담당자 손소연 (☏2690)